제209회 안성시의회 제2차 정례회

2022. 11. 21.(월) ~ 12. 16.(금)

2022년도 제4차 수시분 공유재산 관리계획안

[2022-15호 안성시 평생학습관 이전 건립(변경)]

심 사 보 고 서

조례등심사특별위원회

2022년도 제4차 수시분 공유재산 관리계획안

[2022-15호 안성시 평생학습관 이전 건립(변경)]

심  사  보  고

1. 심 사 경 과                                     2022. 11. 22.

가. 발 의 자 : 안 성 시 장

나. 발의 및 회부일자

❍ 발의일자 : 2022. 10. 06.

❍ 회부일자 : 2022. 10. 18.

다. 상정일자 : 2022. 10. 19. / 2022. 11. 22.

※제208회 안성시의회 임시회 제1차 조례등심사특별위원회

※제209회 안성시의회 제2차 정례회 제1차 조례등심사특별위원회

2. 제안설명 요지

( 제안설명자 : 박노성 회계과장 )

가. 제안이유

❍ 2020년 제191회 안성시의회 제2차 정례회에서 의결을 받았으나 원자재 가격 및 건설공사비의 상승으로 사업비를 변경(증액)하고자 심의 요청함.

나. 주요내용

❍ 주요 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
위 치	안성시 현수동 62번지 일원	좌동
건축연면적	4,600㎡	5,208.69㎡
건물 구조	철근콘크리트	좌동
사업 기간	2020년 5월 ~ 2023년 12월	2020년 5월 ~ 2024년 9월
사 업 비	14,889백만원	23,900백만원
재 원	시비 100%	좌동

3. 전문위원 검토보고 요지

( 전문위원  안 병 기 )

❍ 평생학습관 수강인원 증가 및 주차장 협소, 대중교통 이용 불편 등으로 인한 민원발생을 최소화 하고, 평생학습 선진도시 구축 및 안성시 여성들의 능력개발과 취·창업 지원 및 사회참여 활동지원을 위하여 평생학습관을 이전 건립할 때 원자재 가격 및 건설공사비의 상승으로 사업비를 변경(증액)하는 계획안으로

❍ 현재 운영중인 평생학습관은 20년이상 노후하고 열악한 학습공간으로 한정적 강좌운영과 협소한 주차장으로 수강생들의 많은 불편을 초래하고 있어, 이를 해결하기 위하여 평생학습관을 이전 건립하고자 하는 것으로, 안성시 현수동 62번지 외 7필지에 총사업비 23,900백만원으로, 신축면적 5,208.69㎡에 지하 1층, 지상 4층의 평생학습관, 여성비전센터 등을 2024년 9월까지 이전 신축하는 사업임.

❍ 검토결과, 평생학습 참여기회 확대로 각 분야에 대한 지식정보 제공으로 평생학습 선진도시 구현을 위하여 필요한 사업으로, 관계법령인「공유재산 및 물품관리법」제10조, 같은 법 시행령 제7조,「안성시 공유재산 관리조례」제11조 제1항에 근거하여, 원자재 가격 및 건설공사비의 상승으로 사업비를 변경(증액)하고자 한 사항으로 승인에 특별한 문제점이 없는 것으로 검토 되었음.

4. 질의 및 답변요지 : 생  략

5. 토 론 요 지 : 해당없음

6. 심 사 결 과 : 원안가결

7. 소수의견 요지 : 해당없음

8. 기타 필요한 사항 : 해당없음